제244회  임시회

의안검토보고서

제244회 임시회 사회도시위원회

의 안 검 토 보 고 서

유성구의회 사회도시위원회

	유성구의회 사회도시위원회

제244회 임시회 사회도시위원회

의 안 검 토 보 고 서

	유성구의회 사회도시위원회

2020. 7. 7.(화) 10:00

제244회 유성구의회 임시회

제1차 사회도시위원회

심   사   안   건

1. 부위원장 선임의 건

2. 구암동 도시재생 활성화계획 수립을 위한 의회 의견청취의 건

3. 2020년도 상반기 주요업무 추진상황 보고의 건

가. 보건소 소관

나. 사회복지국 소관

다. 안전도시국 소관

	사회도시위원회

의안 번호	3188

의 안 검 토 보 고 서

1. 제출일자 및 제출자 : 2020년 6월 19일 유성구청장

2. 건  명 : 구암동 도시재생 활성화계획 수립을 위한

의회 의견청취의 건

3. 제안이유 및 주요내용 : 붙 임

4. 검 토 의 견 : 붙 임

위 의안에 대한 검토사항을 붙임과 같이 보고합니다.

2020년  7월  3일

사회도시위원회

전문위원  노 재 창

- 구암동 도시재생 활성화계획 수립을 위한 의회 의견청취 -

검       토       보      고

본 안건은 2020년 6월 19일 유성구청장으로부터 제출되어 2020년  6월 26일 우리위원회로 회부되었음.

1. 제안이유

대전광역시 유성구 구암동 424-88번지 일원의 도시재생 뉴딜사업(함께 정다운 공(共)‧정(情) 마을)의 추진을 위하여「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」제20조에 따라 도시재생활성화계획을 수립하기 위하여 지방의회의 의견을 듣기 위함.

2. 주요내용

가. 그동안 추진현황

○ 2019. 11. : 도시재생활성화계획 수립용역 추진계획

○ 2020.  1. : 도시재생활성화계획 수립용역 발주

○ 2020.  2. : 도시재생활성화계획 수립용역 착수

○ 2020.  3. : 도시재생활성화계획 수립용역 착수보고 / 서면보고

나. 향후계획

○ 2020.  6. : 주민공청회 개최

○ 2020.  6. : 대전광역시 도시재생위원회 심의

○ 2020.  7. : 도시재생 뉴딜사업 공모 접수 / 광역공모

다. 사업계획

○ 사업유형 : 주거지지원형

○ 사 업 명 : 함께 정다운 공(共)‧정(情) 마을

○ 사 업 비 : 207.6억원

(국비 86.3억, 시비 61.8억, 구비 26.5억, 기금 10억, 민간 10억, 공기업 13억)

○ 위    치 : 대전광역시 유성구 구암동 424-88번지 일원

○ 면    적 : 125,324㎡

○ 사업내용(안)

(단위:천원)

구분	사 업 명 / 내 용		사업비
			계	국비	시비	구비	기금	공기업
							민간
마중물 사업	생활인프라개선사업	ㆍ쓰레기 무단투기 방지 ㆍCCTV설치 등	660,000	330,000	231,000	99,000
	가로환경특화사업	ㆍ골목길 (보행)환경 개선	400,100	200,050	140,035	60,015
	집수리 사업	ㆍ노후건축물 외벽 수리 지원	200,000	100,000	70,000	30,000
	공용주차장 조성사업	ㆍ공용주차장 조성	1,100,000	550,000	385,000	165,000
	마을안길 조성사업	ㆍ걷기 좋은 마을 안길 조성	1,550,000	775,000	542,500	232,500
	공동체 어울림센터	ㆍ생활체육시설, 건강증진센터 ㆍ주민커뮤니티 공간 등	6,400,000	3,200,000	2,240,000	960,000
	마을기업 육성 사업	ㆍ마을기업 육성 ㆍ특산품 개발 및 생산	75,000	37,500	26,250	11,250
	구암마을 카페	ㆍ바리스타 교육 ㆍ문화예술 콘텐츠 향유 등	2,250,000	1,125,000	787,500	337,500
	마을 브랜드 개발	ㆍ마을 브랜드 로고 개발 등	250,000	125,000	87,500	37,500
	코워킹 스페이스	ㆍ코워킹 스페이스 공간 조성	150,000	75,000	52,500	22,500
	주민역량강화 사업	ㆍ마을활동가 육성 ㆍ도시재생 대학 운영 등	172,000	86,000	60,200	25,800
	장대마을 커뮤니티센터	ㆍ장대마을 커뮤니티 마당 조성 ㆍ주민 참여형 일자리 창출 등	3,148,000	1,574,000	1,101,800	472,200
	도시재생현장지원센터	ㆍ도시재생현장지원센터 운영	800,000	400,000	280,000	120,000
	마을관리협동조합 육성	ㆍ마을관리 협동조합 육성 ㆍ초기 사업비 지원	104,000	52,000	36,400	15,600
	활성화계획	ㆍ활성화계획 수립	200,000		140,000	60,000
민간	자율주택정비사업	ㆍ노후주택 개량 정비	2,000,000				1,000,000	1,300,000
							1,000,000
부처 연계	임대주택조성사업	ㆍ공공리모델링 ㆍ기존주택 매입‧임대	1,300,000
계			20,759,100	8,629,550	6,180,685	2,648,865	2,000,000	1,300,000

3. 검토의견

본 의견청취의 건은 구암동 424-88번지 일원의 도시재생 뉴딜사업(함께 정다운 공(共)‧정(情) 마을)의 추진을 위한 것으로 해당 사업지는 구암동, 장대동, 노은동으로 행정동이 나뉘어 있고, 구암동, 장대동은 도로가 단절되어 있어 향후 두 지역의 교류가 활발히 될 수 있도록 도로 등 기반시설 등이 설치되어야 사업이 효과적으로 이루어질 수 있을 것으로 보이며 사업대상지 주민 및 유성구 구민이 누구나 활용할 수 있는 공간이 될 수 있도록 장기적인 활용방안을 모색하여 할 것임.

【참고】

○ 위 치 도

○ 마스터플랜